붙임 1		지정공모 과제 제안요구서(RFP)

1. 지정공모과제(2개 과제)

과제명	1. 사막기후 적응형 스마트온실 및 냉방패키지 실증모델 개발
‘19년 정부출연금		총 정부출연금	연구기간
9억 원		18억 원	2년 (1년차 12개월, 2년차 12개월)
연구목표	○ 열대 사막지역 기후 조건에 적합한 플라스틱 온실 모델 개발 및 시공‧운영 기술 정립 ○ 사막기후 맞춤형 온실 냉방 패키지 기술 개발 및 성능평가
주요 연구내용	□ 1단계 : 사막 적응형 온실 모델 개발 ○ 사막형 플라스틱 온실 모델 개발 - 구조 안전성 분석 및 구조물 설계 ․ 풍하중에 대한 안전성 및 작물재배 환경을 고려한 골조 설계 ․ 사막지역 토질을 고려한 기초 설계 ․ 사막 기후에 적합한 피복자재 및 차광스크린 선발 - 사막 적응형 고측고 온실 모델 개발(연동형 플라스틱온실) ․ 온실 설계도 및 자재내역서, 시방서 등 작성 ․ 온실면적 2,000㎡ 내외, 연결동(관리 및 작업) 면적 200㎡ 내외 ․ 작물재배를 위한 수경재배 베드 설계 ※ UAE측 제공 사항 ․ 현지 기상, 토양 등 환경 자료 ․ 온실 설치 부지 및 인프라(전기, 통신, 용수, 도로 등) ○ UAE 재배환경을 반영한 온실 냉방패키지 기술 선정 및 예비시험 - 냉방패키지 기술 구성, 국내 시험온실 적용 및 성능 평가 * 국부냉각, 양액냉각, 증발냉각, 열차단 피복, 차광 등 현재 국내에서 개발완료 또는 산업화된 기술들로 구성 - 기상, 토양, 온실 등 현지 환경 자료 분석을 통한 냉방부하 산정 및 패키지 구성 냉방시스템의 적정 용량 산정 □ 2단계 : 사막형 온실 모델의 UAE 현지 시공 및 실증 ○ 사막형 플라스틱 스마트온실 모델 현지 시공 및 성능평가 - 고온기에 현지에서 온실 환경측정 및 실증이 가능하도록 2019년 하반기에 시공 착수하여 2020년 초까지 시공 완료(수경재배 베드 포함) ․ 현장 시공을 통한 설계도 및 시방서 등 보완 ․ 현장 여건을 고려한 사막형 온실 모델의 개선 - 사막형 스마트온실 성능 평가(시공성, 온실환경 등) ․ 고온기 및 주‧야간 온실 내외부 환경 측정 및 제어범위 분석 ․ 현지 관행 온실과의 성능 및 경제성 등 비교 분석 - 사막형 스마트온실 모델의 운영 매뉴얼 또는 지침서 작성 ․ 스마트온실 운영 및 관리, 문제점 및 개선 요인 발굴 ○ UAE 현지 실증온실에 냉방패키지 설치 및 냉방 성능평가 - 현지 실증온실에 냉방패키지 및 ICT 기반 통합제어시스템 설치 - 냉방패키지 기술의 성능평가 : 냉방효과, 경제성 등 분석 * 냉방패키지 효과 비교대상 : 1) 기존 온실, 2) 신모델 온실 ○ 사막형 온실 냉방패키지 기술 설치 및 운영‧관리 기술 정립 - 사막형 온실 냉방패키지 기술 설치 매뉴얼 또는 설계서(설치도, 재료내역, 시방서) 작성 - 사막형 온실 냉방패키지 기술 운영 및 관리 매뉴얼 또는 지침서 작성 ※ 본 과제 수행시 UAE 관계기관(농업식품안전청(AD AFSA))과 협력연구를 위해 필요한 출연금이 연차별 각 1억 원 포함되어 있음
연구팀 구성요건	○ 본 과제는 국내에 사업장을 둔 온실 설계 및 시공 전문기업이 주관기관으로 응모하여야 하며, 연구팀에는 온실의 공조시스템 및 냉방관련 기술에 대한 사업화 경험이 있는 기업 또는 연구자가 반드시 연구팀에 포함되어야 함 ○ 본 과제는 농촌진흥청의‘사막형 스마트팜 패키지기술개발’사업에 선정된 “사막형 온실의 냉방기술 고도화 및 최적 운영기술연구” 및 “사막기후에 적합한 물절약형 작물재배기술개발” 과제와 수행기간 동안 긴밀한 협력 필수 ○ 본 과제 연구비의 일부를 UAE측 연구팀의 현지 시설 및 시험작물 관리, 실증데이터 수집 등 협력을 위한 국제공동연구 또는 위탁과제 등의 형식으로 상호간 협약에 의해 지급하여야 함
목표성과	○ 사막형 플라스틱 연동 온실 1종 ○ 사막형 플라스틱 연동 온실의 설계도, 시방서, 자재내역을 포함한 운영‧관리 매뉴얼 또는 지침서 1건 ○ 사막형 온실 냉방패키지 시스템 1종 ○ 사막형 온실의 냉방시스템 설치 및 운영 방안 1건

과제명	2. 사막지역 관행 온실의 환경개선을 위한 리모델링 및 현장 실증
‘19년 정부출연금		총 정부출연금	연구기간
5억 원		10억 원	2년 (1년차 12개월, 2년차 12개월)
연구목표	○ 열대 사막지역 관행 온실의 재배환경 및 관리시스템 고도화를 위한 구조개선 기술 정립
주요 연구내용	□ 1단계 : 사막기후 맞춤형 온실 냉방패키지 기술 개발 ○ 사막지역 온실의 환경 및 구조 개선을 위한 리모델링 설계 - 구조 안전성 분석 및 구조물 리모델링 설계 ․ 풍하중에 대한 안전성 및 작물재배 환경을 고려한 골조 리모델링 설계 ※ UAE측 제공 사항 ․ 리모델링용 현지 시험온실 제공 □ 2단계 : UAE 현지 온실의 리모델링 및 성능평가 ○ 현지 온실의 리모델링 시공 및 성능평가 -‘20년에 현지에서 온실 환경측정 및 실증이 가능하도록 2019년말까지 리모델링 시공 완료 ․ 현장 리모델링 시공을 통한 설계도 및 시방서 등 보완 ․ 현지 여건을 고려한 온실 리모델링 기술의 고도화 방안 모색 - 리모델링 온실의 성능 평가(시공성, 온실환경 등) ․ 고온기 및 주‧야간 온실 내외부 환경 측정 및 제어범위 분석 ․ 현지 관행 온실과의 성능 및 경제성 등 비교 분석 - 사막지역 리모델링 온실의 운영 매뉴얼 또는 지침서 작성 ․ 온실 운영 및 관리, 문제점 및 개선 요인 발굴 ※ 본 과제 수행시 UAE 관계기관(국제해수농업연구센터(ICBA))과 협력연구를 위해 필요한 출연금이 연차별 각 1억 원 포함되어 있음
연구팀 구성요건	○ 본 과제는 국내에 사업장을 둔 온실 설계 및 시공 전문기업이 주관기관으로 응모하여야 하며, 연구팀에는 온실 측고인상 등 리모델링 기술에 대한 사업화 경험이 있는 기업 또는 연구자가 반드시 연구팀에 포함되어야 함 - 농촌진흥청의 관련 전문연구팀과의 협력 또는 과제 참여 필수 ○ 본 과제 연구비의 일부를 UAE측 연구팀의 현지 시설 및 시험작물 관리, 실증데이터 수집 등 협력을 위한 국제공동연구 또는 위탁과제 등의 형식으로 상호간 협약에 의해 지급하여야 함
목표성과	○ 사막형 리모델링 온실 1종 ○ 사막형 리모델링 온실의 설계도, 시방서, 자재내역을 포함한 운영‧관리 매뉴얼 또는 지침서 1건